109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 신안군에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
군단위 LPG 배관망 지원사업	15,630	-	6,252	9,378	-	2020	2019	20
어촌뉴딜300사업 (암태 생낌항)	12,173	4,260	2,501	5,477	2,436	2021	2018	40
어촌뉴딜300사업 (임자 하우리항)	14,350	5,023	2,721	6,457	2,870	2021	2018	20
어촌뉴딜300사업 (흑산 만재항)	7,736	2,707	2,707	3,481	1,547	2021	2018	80
어촌뉴딜300사업 (임자 진리항)	10,569	3,699	420	4,756	2,115	2021	2018	20
도서자생식물 보전센터건립	3,800	1,200	720	1,000	880	2021	2016	80
소금박람회 행사 개최	100	-	100	-	-	2019	2019	100
다기능 수산물 위판장 건립사업	5,000	2,750	1,000	1,250	-	2021	2016	10
천일염 종합유통센터 건립사업	18,000	-	214	7,000	10,786	2021	2018	5
안좌 퍼플교 시설공사	3,677	-	1,587	1,051	1,039	2020	2019	100
문화예술회관, 문화원건립사업	14,400	-	843	564	17,493	2021	2019	10
하의 천사조각상설치	2,300	1,900	1,900	-	400	2021	2019	82
증도면 복지회관 신축	2,619	69	232	323	1995	2021	2017	20

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

- 사업별로 별지 작성

사업명

군단위 LPG배관망 지원사업

담당자

지역경제과 박세영 (☎240-8266)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민 에너지복지 향상을 위해 LPG 배관망 방식의 가스 공급체계 구축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2020년(2년간)

○ 위 치 : 전남 신안군 지도읍 본도

○ 규 모 : 11개 마을 약1,050세대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,630		6,252	9,378
국 비	7,815		3,126	4,689
시 도 비
시군구비	6,252		2,501	3,751
지 방 채
민간자본
기 타	1,563		625	938

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘19. 2월 : 주민설명회 개최 및 주민동의서 징구

○ ‘19. 3월 : 설계 감리 사업자 선정 및 실시설계

○ ‘19. 4월 : 1차년도 사업비 56억원 위탁사업비로 집행

○ ‘19. 6월 ~ ’20. 9월 : 시공 사업자 선정 및 시설시공

□ 향후계획

○ ~ ’20. 9월 : 시공 사업자 선정 및 시설시공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

어촌뉴딜300사업(암태 생낌항)

담당자

도서개발과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021(3개년)

○ 위 치 : 신안군 암태면 신석리 생낌항 일원

○ 규 모 : 방파제 100m, 진입도로 580m, 안전시설설치, 어구보관창고 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,173백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,173	4,260	2,501	5,477	2,436
국 비	8,521	2,982	2,501	3,834	1,705
시 도 비	1,096	383	-	493	220
시군구비	2,556	895	-	1,150	511

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 5.

○ 기본계획 승인 고시 : 2019. 12.

○ 공사 착공 : 2020. 03.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

어촌뉴딜300사업(임자 하우리항)

담당자

도서개발과 김삼현(☎240-8417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021(3개년)

○ 위 치 : 신안군 임자면 광산리 하우리항 일원

○ 규 모 : 방파제 70m, 경사식선착장 10m, 진입로 확장, 어구보관창고 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	14,350	5,023	2,721	6,457	2,870
국 비	10,045	3,516	2,721	4,520	2,009
시 도 비	1,292	452	-	581	259
시군구비	3,013	1,055	-	1,356	602

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 5.

○ 기본계획 승인 고시 : 2019. 12.

○ 공사 착공 : 2020. 04.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

어촌뉴딜300사업(흑산 만재항)

담당자

도서개발과 김삼현(☎240-8417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021(3개년)

○ 위 치 : 신안군 만재도리 만재항 일원

○ 규 모 : 접안시설 40m, 경사식선착장 53m, 어구보관창고, 경관산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,736백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,736	2,707	2,707	3,481	1,547
국 비	5,415	1,895	1,895	2,437	1,083
시 도 비	696	244	244	313	138
시군구비	1,625	568	568	731	326

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 5.

○ 기본계획 승인 고시 : 2019. 12.

○ 공사 착공 : 2019. 12.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

어촌뉴딜300사업(임자 진리항)

담당자

도서개발과 김삼현(☎240-8417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021(3개년)

○ 위 치 : 신안군 진리 진리항 일원

○ 규 모 : 방파제 60m, 기존호안정비 130m, 부잔교, 탐방로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,569백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,569	3,699	420	4,756	2,115
국 비	7,398	2,589	420	3,329	1,480
시 도 비	951	333	-	428	190
시군구비	2,220	777	-	999	445

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 5.

○ 기본계획 승인 고시 : 2019. 12.

○ 공사 착공 : 2020. 04.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

도서자생식물보전센터건립

담당자

세계유산과 조영준(☎240-8654)

□ 사업목적 및 필요성

○ 「에코 푸른 숲 전남」만들기의 일환으로 신안에서만 볼 수 있는 도서       자생식물을 보전하고 활용하여 환경부 관리 멸종위기종 및 생물자원

연구․개발

○ 전시․교육을 통한 보전과 지속가능한 이용역량강화 등 육지와 차별화된       공간을 조성하여 관광객유치로 지역경제활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 01 ~ 2021. 12

○ 위 치 : 신안군 백산리 633-58번지 일원

○ 규 모 : 건축공사 804㎡, 전시물·표본설치 800㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비	1,900	598	396	550	546
시 도 비
시군구비	1,900	508	324	450	428
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2016. 06. : 신안 도서자생식물보전센터 조성 기본계획 완료

○ 2017. 05. : 전남도 경관디자인 심의 완료

○ 2017. 10. : 도서자생식물보전센터 조성 실시설계용역 완료

○ 2017. 10. : BF 등 각종 인허가 행정절차 완료 및 건축공사 2차준공

○ 2019. 04. : 도서자생식물 보전센터 건립

○ 2019. 07. : 도서자생식물 보전센터 태양광 설치

○ 2020. 03. : 도서자생식물 보전센터 전시물 표본 용역

□ 향후계획

○ 도서자생식물 전시물 및 표본설치 실시설계 (800㎡)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

소금박람회 행사 개최사업

담당자

해양자원과 문선주(☎240-8605)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신안천일염 홍보 및 판로개척

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009 ~ 2020년(12개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,500	1,200	100	100	100
국 비	-		-	-	-
시 도 비	-		-	-	-
시군구비	1,500	1,200	100	100	100
지 방 채	-		-	-	-
민간자본	-		-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2019. 08. 14. ~ 8. 17. : 2019 소금박람회 개최

○ 2019. 12. : 박람회 운영 결과 보고 및 정산

○ 2020. 03. 10. ~ 4. 3. : 2020 소금박람회 주관사 모집 공고

○ 2020. 05. 22. : 주관사 선정 심사

○ 2020. 07. 09. : 기본계획 협의 및 업무대행 협약 체결

□ 향후계획

○ 2020. 8 : 세부 실행계획 수립

○ 2020. 10. 16. ~ 10. 18. : 2020 소금박람회 개최

○ 2020. 12 : 박람회 운영 결과 보고 및 정산

사업명

다기능 수산물 위판장 건립사업

담당자

해양자원과 김태형(☎240-8607)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신안군의 청정 수산물의 원활한 유통망 구축 및 사업수행 공간을 확보

하여 어업인 소득 증대에 기여하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2021

○ 위 치 : 압해읍 송공리 718-64(매립 1공구 A-13블럭)

○ 규 모 : 지상 2층, 철골 철근 콘크리트 구조

(부지 6,607㎡, 건축면적 1,520㎡, 연면적 2,081㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	2,750	1,000	1,250	0
국 비	2,000	1,100	400	500	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,500	825	300(삭감)	375	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	1,500	825	300	375	0
기 타	0	0	0	0	0
	5,000	2,750	1,000	1,250	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘17. 01. 05. : 다기능 수산물 위판장 시설사업 확정

○ ’17. 03. 13. : 사업자 확정(신안군 수협)

○ ‘18. 03. 13. : 실시설계용역업체 선정

○ ’18. 04. 02. : 실시설계용역 착수(완료기한 ‘18. 09. 28.)

○ ’18. 09. ~ 20. 03. : 군관리계획 결정 변경 용역(용도지역, 시장)

계약체결(발주 신안군수협)

○ ‘19. 09. : 기본설계 확정 및 실시설계 정지해지

○ ‘20. 03. : 군관리계획 변경·결정(시장)용역 중

○ ‘20. 07. : 실시설계 및 계약심사 완료

□ 향후계획

○ 군관리계획 실시인가 용역(시장)발주

○ 2021년 12월 공사 준공예정

사업명

천일염 종합유통센터 건립사업

담당자

해양자원과 김대영(☎240-8609)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제기준에 맞는 수출제품을 생산하고 안정적인 생산□관리체계를 구축하여

판로확대 및 유통구조 개선을 통한 경쟁력 강화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2021.(4개년)

○ 위 치 : 전라남도 신안군 압해읍 송공리 804번지 일원

○ 규 모 : 조성면적-15,000㎡, 건축공사-5,490㎡(공장동, 판매동, 검사동, 창고동 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,000		214	7,000	10,786
국 비	7,500		107	3,500	3,893
시 도 비	1,000		14	455	531
시군구비	9,500		93	3,045	6,362
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2019. 11. 천일염 종합유통센터건립 설계공모 완료

○ 2019. 11. 천일염 종합유통센터건립 기본 및 실시설계 용역 추진

○ 2020. 07. 천일염 종합유통센터건립 경관심의 완료

□ 향후계획

○ 2020. 11. 천일염 종합유통센터건립사업 발주

○ 2021. 11. 천일염 종합유통센터건립사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○

사업명

안좌 퍼플교 시설공사

담당자

안전건설과 박용인(☎240-8904)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안좌 퍼플교는 본도와 낙도를 잇는 중요 교량으로써 2008년 설치 이후 상시 이동 가능한 통행로를 확보함으로써 낙도민들의 삶의 질 향상에 크게 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 08. 13 ~ 2020. 03. 06.

○ 위 치 : 신안군 안좌면 두리, 반월리, 박지리 일원

○ 규 모 : L=1,462m B=2.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,677백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계			1,587	1,051	1,039
국 비	3,677	-	-	-	-
시 도 비	756	-	756	-	-
시군구비	2,921	-	831	1,051	1,039

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :100%)

○ 19. 03 : 안좌 퍼플교 시실설계 완료

○ 19. 03 : 전라남도 계약심사 완료

○ 19. 04 : 안좌 퍼플교 시설공사 일상감사 완료

○ 19. 07 : 안좌 퍼플교 시설공사 채무부담 의회 의결

○ 19. 08 : 안좌 퍼플교 시설공사 착공

○ 20. 03 : 안좌 퍼플교 시설공사 준공

사업명

문화예술회관, 문화원 건립사업

담당자

문화관광과 주성민(☎240-8352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민들의 삶의 질 향상과 문화원을 비롯한 문화예술단체의 자긍심 고취를

통한 문화 복지 구현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021

○ 위 치 : 신안군 압해읍 학교리 504번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 21,500㎡, 건축면적 4,935㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,900		843	564	17,493
국 비
시 도 비	2,560		843	564	1,153
시군구비	16,340				16,340
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 2019.  1. : 기본계획 및 타당성 검토 용역 완료

○ 2019.  3. : 사업계획 변경 승인 완료(도, 문체부)

○ 2019.  3. : 도 투자심사 승인

○ 2019.  9. : 설계공모 완료

○ 2019. 12. : 기본 및 실시설계 용역 계약

○ 2020.  7. : 지반조사 용역 완료

사업명

문화예술회관, 문화원 건립사업

담당자

문화관광과 주성민(☎240-8352)

□ 향후계획

○ 2020.  9. : 경제성 검토(VE)

○ 2020.  9. : 전남도 건설기술심의 의뢰 예정

○ 2020. 10. : 조달청 원가심사 및 조달청 계약 의뢰

○ 2020. 12. : 공사착공

□ 사업변경 내역(해당시)

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	비 고
위 치	압해읍 신장리 462-10	압해읍 학교리 538-1
대지면적	7,600.00㎡	21,413.00㎡	13,813.00㎡(증)
연 면 적	3,300㎡	6,350㎡	3,050㎡(증)
건축면적	2,325.10㎡	5,004.60㎡	2,609.90㎡
공 사 비	14,400	18,900	4,500(증)

사업명

하의 천사조각상 설치

담당자

문화관광과 최훈화(☎8524)

□ 사업목적 및 필요성

○ 故 김대중 대통령의 민주화운동 및 노벨평화상 수상을 기리고자 평화의 섬 하의도에 천사(Angel) 조각 작품을 설치하고 이를 통한 새로운 관광자원 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2021

○ 위 치 : 신안군 하의면 일원

○ 규 모 : 천사상 318기 설치 및 천사 소공원 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,300	500	1,400	200	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 82%)

○ 2019. 4. 천사상 318점 설치 완료

□ 향후계획

○ 2020. 12. 소공원 조성을 위한 부지매입 완료

○ 2021.  1. 소공원 조성을 위한 실시설계 용역 추진

○ 2021.  4. 소공원 부지조성 완료 후 조각상 재배치 추진

○ 2021. 12. 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2019	2020	2021이후	비고
당초	2,300	500	1,800	-	-
변경	2,300	500	1,400	200	200

사업명

증도면 복지회관 신축

담당자

주민복지과 이건욱(☎240-8934)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다목적 복지회관을 설치·운영함으로써 지역주민의 편리한 이용 및

양질의 복지서비스를 제공하여 노인 복지 증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021

○ 위 치 : 증도면 증동리 1962-2번지

○ 규 모 : 복지회관 1동(연면적 998.2㎡, 지하1, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,619백만원(군비 2,619)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,619	69	232	323	1,995
국 비
시 도 비
시군구비	2,619	69	232	323	1,995
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 건축공사(부지조성) 추진중(20%)

○ 설계변경 추진중

□ 향후계획

○ 2020. 09. : 설계변경 완료 및 변경계약

○ 2020. 11. : 건축공사 1차분 완료 및 2차분 계약

○ 2021. 06. : 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 당초 2017~2018 => 변경 2019~2021(건축공사 계약해지에 따른 신규계약에 따른 사업기간 증)

10-2. 지방채 발행사업

우리 신안군에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2019년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 재원에 지금까지 지방채 발행액 및 발행예정액을 필히 기재

10-3. 민간투자사업

우리 신안군에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2019년	2020년	2021년 이후
BTL		해	당	없	음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 총사업비, 최소수익보장 등 계약조건, 지금까지 임대료 및 운영비 부담액, 향후 부담예정액, 계약조건변경 사항 등을 필히 기재