109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 신안군에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
신재생에너지 융복합지원사업	4,400	-	4,400	-	-	2020년	2020년	100
자은 다목적 마을회관 건립	4,000	-	1,200	1,400	1,400	2022년	2020년	10
작은섬 운항 도선 매입	2,660	-	2,504	156	-	2021년	2020년	94
연료운반선 건조지원	3,500	-	-	1,000	2,500	2022년	2020년	10
황해교류역사관 건립	9,800	7,800	118	-	2,000	2022	2020	10
임자 노후관광지재생사업	2,400	2,400	220	-	-	2021	2020	80
신안 섬플라워랜드 조성	5,500	-	-	-	5,500	2023	2020	5
암태 암석공원 조성사업	6,000	-	-	230	-	취소	20	0
흑산성당 근대문화재복원 및 관광기반확보사업	5,000	-	-	-	5,000	2023	2020	0
흑산도 정약전 평화의 길 조성	13,500	-	-	5,000	8,500	2023	2020	10
지하시설물 전산화사업	2,365	-	1,067	1,298	-	2021	2020	80
신안군 공립 요양병원 건립	5,500	11	154	1,699	3,636	보류	2020	3
어촌뉴딜300사업 (흑산 다물대둔항)	13,535	-	2,644	5,414	4,645	2022	2020	30
어촌뉴딜300사업 (암태 당사항)	9,530	-	2,474	3,812	3,244	2022	2020	10

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
어촌뉴딜300사업 (암태 오도항)	9,054	-	2,385	3,622	3,048	2022	2020	20
어촌뉴딜300사업 (임자 재원항)	11,521	-	2,476	4,608	3,941	2022	2020	20
어촌뉴딜300사업 (암태 추포항)	14,490	-	2,361	5,796	4,980	2022	2020	20
어촌뉴딜300사업 (비금 가산항)	3,000	-	166	1,200	1,050	2022	2020	20
어촌뉴딜300사업 (증도 검산항)	3,000	-	150	1,200	1,050	2022	2020	10
어촌뉴딜300사업 (안좌 자라항)	3,000	-	170	1,200	1,050	2022	2020	40
압해 매화지구 연안정비사업	2,330	-	187	1,064	1,066	2022	2020	40
자은 내치지구 연안정비사업	3,714	-	163	1,429	1,785	2022	2020	10
도초면 농어촌폐기물 처리시설 설치	3,452	135	865	2,452	-	2021	2020	55
지도장동~봉리간 농어촌도로 확포장공사	5,000	-	-	200	4,800	2023	2020	5
병어공원 조성사업	4,000	-	104	736	3,160	2022	2020	5
간재미공원 조성사업	2,000	-	26	586	1,400	2022	2020	32
스마트양식 클러스터 조성사업	41,600	4,700	-	16,900	20,000	2022	2020	10
신안군 보조축구장 조성	2,000	-	550	600	850	2022	2020	30
신안군 생활밀착형 국민체육센터 건립	19,800	-	111	-	19,689	2024	2020	0
신안군 근린생활형 국민체육센터 건립	3,500	-	24	326	3,150	2022	2020	10

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
신안군체육회장기 체육대회 지원	150	-	-	150	150	매년 반복	2020	0
신안군수기 체육대회 지원	150	-	-	150	150	매년 반복	2020	0
1004섬 신안 국제 시니어 바둑대회	295	-	18	295	295	매년 반복	2020	5
김환기미술관(플로팅뮤지엄)건립	9,800	400	469	4,608	4,323	2022	2020	28
세계 해태상 테마공원 조성사업	2,442	308	-	932	1,202	2022	2020	13
대지의 문화시설조성	5,600	-	-	1,180	4,420	2022	2022	0
1004섬길역 조성	12,000	-	-	1,200	10,800	2023	2020	10

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘20년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신재생에너지 융복합지원사업

담당자

경제에너과 박성욱(☎8339)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정부의 재생에너지 3020 이행계획에 따른「신재생에너지보급 융·복합지원사업」을 신안군 자은면의 주택, 상업 및 공공건물 등의 밀집지역에 태양광과 태양열 등 신재생에너지 설비를 구축하여 도서지역의 에너지 복지 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31

○ 위 치 : 신안군 자은면 일원(587개소)

○ 규 모 : 587개소(태양광,태양열 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,400		4,400
국 비	2,200		2,200
시 도 비	400		400
시군구비	1,000		1,000
지 방 채
민간자본	800		800
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

◦ 2019. 03. : 융복합사업 컨소시엄 구성

◦ 2019. 04 ~ 06. : 자은면 주민 수요조사

◦ 2019. 06. : 공모사업 신청

◦ 2019. 09. : 2020년 신재생에너지보급(융복합지원) 공모사업 선정

◦ 2020. 02. : 지방재정투자심사 및 업무협약 체결(재단법인 녹색에너지연구원)

◦ 2020. 12. : 사업완료 및 정산

사업명

자은 다목적 마을회관 건립

담당자

경제에너과 박성욱(☎8339)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 다양한 주민 문화 활동 지원 및 급변하는 사회의 각종 정보를 제공함으로써 주민들의 요구를 충족시킬 수 있는 복합공간 조성

❍ 도서지역인 우리군의 특성상 문화 및 복지 인프라가 부족한 상황에서 지역주민의 소통 공간 및 지역주민의 고령화에 따른 복지 공간 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 8월 ~ 2022년 3월까지

○ 위 치 : 신안군 자은면 구영리 372번지 일원

○ 규 모 : 3,400㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000		1,200	1,400	1,400
국 비	1,700		700	1,000
시 도 비
시군구비	2,300		500	400	1,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

❍ 공유재산 심의 : 2019년 8월

❍ 기본설계 진행 : 2019년 9월 ～ 2020년 6월

❍ 기본설계 완료 : 2020년 6월

❍ 실시설계 인허가 등 행정절차 이행 : 2020년 10월～ 2021년 1월

❍ 공사 착공 및 준공 : 2021년 5월 ～ 2022년 5월

사업명

작은섬 운항 도선 매입

담당자

교통지원과 김송현(☎8163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 작은섬 주민들의 교통편의 증진을 위해 도선을 정기운항하여 도서민들의       정주여건 개선과 사계절 꽃피는 섬 축제 등으로 늘어나는 관광객 이동편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2021년

○ 위 치 : 신안군 일원

○ 규 모 : 250톤급 유·도선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,660백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,660		2,504	156
국 비
시 도 비
시군구비	2,660		2,504	156
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2020. 12. 02. 운항관리규정 서면 및 현장 심사

○ 2020. 12. 22. 선박 매입 및 소유권 이전

○ 2020. 12. 23. 선박 운항 개시

□ 향후계획

○ 2021. 01월   선박 매입잔금 집행

□ 사업변경 내역(해당시)                                   (단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2019	2020	2021이후	비고
당초	2,600			2,600	-
변경	2,660			2,504	156

사업명

연료운반선 건조지원

담당자

교통지원과 김송현(☎8163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연료운반선을 건조·운항하여 석유, 가스 등의 생필품 공급에 어려움을 겪고       있는 섬지역 주민들의 주민불편 해소 및 물류 운송비 부담을 최소화 하는 등       정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2021년

○ 위 치 : 신안군 일원

○ 규 모 : 200톤급 연료운반선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500			1,000	2,500
국 비	1,000			1,000
시 도 비
시군구비	2,500				2,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 02. 25. 연료운반선 건조지원사업 선정

○ 2020. 12. 31. 연료운반선 기본 설계 및 실시설계 계약 체결

□ 향후계획

○ 2021. 01월 ~ 04월 연료운반선 기본 설계 및 실시설계

○ 2021. 05월 ~ 12월 연료운반선 건조

○ 2021. 12월        연료운반선 취항

사업명

황해교류역사관 건립

담당자

문화관광과 김형언(☎240-8974)

□ 사업목적 및 필요성

○ 통일신라시대의 절터인 흑산 무심사지와 송원대 해저 유물이 발굴된 증도 등 대 중국 교역의 중심지로써「황해교류역사관」조성으로 천사대교 개통에 따른 관광활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 신안군 압해읍 송공리 58-52 일원

○ 규 모 : 건축면적 4,893㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,800	7,800	118	0	2,000
국 비	3,900	3,900	59	0	0
시 도 비	5,900	3,900	59	0	2,000
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 9. : 황해교류역사관 건립공사 기본 및 실시설계 용역 추진

○ 2021. 7. : “황해교류역사관 전시설계 및 전시물 제작설치” 협상에 의한계약 협상 중

□ 향후계획

○ 2021.  8. : “황해교류역사관 전시설계 및 전시물 제작설치” 협상에 의한 계약 추진

○ 2021. 12. : 건축물 실시설계 및 행정절차 완료

○ 2022.  1. : 시설공사 착공

○ 2023. 12. : 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

임자 노후관광지 재생사업

담당자

문화관광과 최훈화(☎240-8524)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임자대교 개통 및 튤립축제 개최로 인한 폭발적 관광수요를 대비한 관광지 정비로 관광만족도와 지역경제 활성화 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2021

○ 위 치 : 신안군 임자면 대광해수욕장 일원

○ 규 모 : 대광해수욕장 일원 정비 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,400	2,400	220	0	0
국 비
시 도 비	1,200	1,200	110	0	0
시군구비	1,200	1,200	110	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2020. 12. : 블루플래그 조성사업 및 숲조성사업 착공

○ 2021.  3. : 편의시설 정비공사 시설공사 착공

○ 2021.  6. : 편의시설 정비공사 시설공사 준공

□ 향후계획

○ 2021.  8. : 블루플래그 조성사업 및 숲조성사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

신안 섬 플라워랜드 조성

담당자

문화관광과 최훈화(☎240-8524)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 대표 플로리스트학교 (재)방식예술원과 업무협약을 토대로 신안의 자생식물과 희귀식물을 활용한 테마가든 조성, 꽃장식 체험시설, 조형미술관등을 조성해 천사대교 개통과 목포 해상케이블카 오픈에 따른 몰려드는 관광객에게 다양한 볼거리 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2023

○ 위 치 : 신안군 압해읍 신장리 68-6 일원

○ 규 모 : 부지 34,388㎡, 건물 3,495㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,500	0	0	0	5,500
국 비
시 도 비	2,750	0	0	0	2,750
시군구비	2,750	0	0	0	2,750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020.  1 : 신안군-(재)방식예술원 업무협약 체결

○ 2020.  3. : 섬 플라워랜드 기본계획 용역발주

○ 2020. 12. : 지방재정 투자심사 완료

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 균특사업비 확보

○ 2021. 12. : 사업부지 확보(기재부 소관 토지매입 추진)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

암태 암석공원 조성사업

담당자

문화관광과과 박종호

(☎240-8679)

□ 사업목적 및 필요성

○ 암태 암석공원 조성으로 신안군 천혜의 자연환경과 선캄브리아기의 사암,       규암이 이루어내는 조화로움을 통해 전남 서남권 문화관광 상징공간 기       반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2023

○ 위 치 : 전남 신안군 암태면 도창리 889번지 일원

○ 규 모 : 암석공원 조성(327,581㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,000			230
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	-	-	230	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 21. 2 : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료

○ 21. 3 : 사업대상지 부지 매입 착수

○ 21. 6 : 사업대상지 22년 균특전환사업(지방정원 신규) 확정 [공원녹지과]

□ 향후계획

○ 21. 12 : 사업대상지 부지 매입 종료(230백만원)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 기 투자심사 완료 된 사업계획 취소

○ 22년 균특전환사업(지방정원 신규) 추진 예정 [공원녹지과]

사업명

흑산성당 근대문화재복원 및

관광기반 확보사업

담당자

지역경제과 이상헌

(☎240-8357)

□ 사업목적 및 필요성

○ 흑산성당 문화재 주변 일대를 근대문화 공간으로 복원하여 관광인프라        개선 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년

○ 위 치 : 전남 신안군 흑산면 진리 흑산성당 일원

○ 규 모 : 부지매입 1식(토지 25,539㎡, 건축연면적 3,990㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000		5,000
국 비
시 도 비
시군구비	2,000		2,000
지 방 채
민간자본
기 타	3,000		3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 19. 12 : 흑산성당 근대문화 복원업무 MOU체결

○ 20. 3. ~ 12. : 소유권 이전 및 부기등기 처리완료

○ 20. 1. ~ 12. : 흑산성당 근대문화공간복원 사업추진

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

흑산도 정약전 평화의 길 조성

담당자

문화관광과이재근(☎240-8356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 흑산도는 조선 후기 천주교 창설의 주역 손암 정약전의 유배지였으며,        자산어보 등의 실학서를 집필하고, 후학을 양성한 곳으로 흑산성당과        사촌서당 등을 찾는 성지 순례객들의 증가 및 흑산도 관광자원과             연계할 수 있는 휴양관광코스 개발 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023

○ 위 치 : 신안군 흑산면 진리 31-1번지 일원

○ 규 모 : 135억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,500			6,600	6,900
국 비	5,600			1,400	4,200
시 도 비	1,650			300	1,350
시군구비	3,650			2,300	1,350
지 방 채
민간자본	2,600			2,600	0
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 전라남도 지방재정투자심사

○ 흑산성당 피정의집 조성 설계 용역

□ 향후계획

○ 흑산도 정약전 평화의길 실시설계 용역 : 2021년

○ 흑산성모공원 조성 기본계획 및 실시설계 용역 : 2022년

사업명

지하시설물 전산화사업

담당자

민원봉사과 최정인(☎240-8563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지하시설물의 위치정보를 전산화하여 시설물의 체계적 관리를 통한 각종 재난·안전사고 예방 및 행정업무 효율성 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2021(2개년)

○ 위 치 : 신안군 압해읍 일원

○ 규 모 : 도로 76.04㎞, 상수도 128.95㎞, 하수도 47.01㎞ 측량 및 조사/탐사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,365백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,365	-	1,067	1,298	-
국 비	1,418	-	640	778	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	947	-	427	520	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  85 %)

○ 계획 수립 및 계약 : 2020. 1. ~ 2020. 5.

○ 1차 사업 준공 : 2020. 10.

○ 2차 사업 준공 : 2020. 12.

○ 3차 사업 진행 중 : 2021. 1. ~ 현재

□ 향후계획

○ 3차 사업 준공 : 2021. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

신안군 공립요양병원 건립

담당자

보건소 장성복(☎240-8807)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬으로 이루어진 신안군은 이미 초고령화 자치단체

○ 의료 취약지 섬 지역의 공공의료 서비스 기반 확대 필요

○ 치매환자 가족에 대한 심리적, 의료적 지원 등 지역사회 의료 중심 치매
인프라 역할 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년 (3년)

○ 위 치 : 신안군 압해읍 동서리 69-3번지 외 1필지

○ 규 모 : 신안군공립요양병원 (지상2층, 연면적 1,650㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,500	11	154	1,699	3,636
국 비	932	5	77	850
시 도 비	186	3	39	424
시군구비	4,382	3	38	425	3,636
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  3%)

○ 지방재정 투자심사 결과 통보 : 2020. 6.

○ 설계용역 계약 : 2020.  8.

□ 향후계획

○ 사업추진 보류

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

어촌뉴딜300사업(흑산 다물대둔항)

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3개년)

○ 위 치 : 신안군 흑산면 다물도리, 대둔도리 일원

○ 규 모 : (다물도) 연결진입로, 접안시설

(대둔도) 방파제, 접안시설, 어구어망창고, 공동작업장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,535백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,535	0	2,644	5,414	4,645
국 비	9,475	0	1,851	3,790	3,252
시 도 비	1,218	0	238	487	418
시군구비	2,842	0	555	1,137	975
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2020. 04.

○ 기본계획 승인 고시 : 2020. 12.

○ 공사 착공 : 2021. 04.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해양수산부 2020년 어촌뉴딜사업 대상지 총사업비 조정

(당초 사업비 : 13,902백만원, 변경 사업비 : 13,535백만원)

사업명

어촌뉴딜300사업(암태 당사항)

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3개년)

○ 위 치 : 신안군 암태면 당사도리 일원

○ 규 모 : 선착장, 물양장, 부잔교, 어구어망창고, 어울림마당 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,530백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,530	0	2,475	3,812	3,244
국 비	6,671	0	1,733	2,668	2,271
시 도 비	858	0	223	343	292
시군구비	2,001	0	519	801	681
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 한국어촌어항공단 위수탁 협약 체결 : 2020. 02.

○ 기본계획 승인 고시 : 2020. 12.

○ 공사 착공 : 2021. 04.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해양수산부 2020년 어촌뉴딜사업 대상지 총사업비 조정

(당초 사업비 : 9,897백만원, 변경 사업비 : 9,530백만원)

사업명

어촌뉴딜300사업(임자 재원항)

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3개년)

○ 위 치 : 신안군 임자면 재원도리 일원

○ 규 모 : 접안시설, 물양장, 어선수리장, 어구보관창고, 방파제 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,521백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,521	0	2,476	4,608	3,940
국 비	8,065	0	1,733	3,226	2,758
시 도 비	1,037	0	223	415	354
시군구비	2,419	0	520	967	828
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2020. 04.

○ 기본계획 승인 고시 : 2020. 12.

○ 공사 착공 : 2021. 06.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해양수산부 2020년 어촌뉴딜사업 대상지 총사업비 조정

(당초 사업비 : 11,888백만원, 변경 사업비 : 11,521백만원)

사업명

어촌뉴딜300사업(암태 추포항)

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3개년)

○ 위 치 : 신안군 암태면 수곡리 일원

○ 규 모 : 선착장, 여객터미널, 주차장, 어촌체험센터 리모델링, 공원조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,490	0	2,361	5,796	4,980
국 비	10,143	0	1,653	4,057	3,486
시 도 비	1,304	0	212	522	448
시군구비	3,043	0	496	1,217	1,046
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2020. 04.

○ 기본계획 승인 고시 : 2020. 12.

○ 공사 착공 : 2021. 06.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해양수산부 2020년 어촌뉴딜사업 대상지 총사업비 조정

(당초 사업비 : 14,857백만원, 변경 사업비 : 14,490백만원)

사업명

어촌뉴딜300사업(비금 가산항)

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3개년)

○ 위 치 : 신안군 비금면 가산리 일원

○ 규 모 : 기항지개선사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	0	166	1,200	1,200
국 비	2,100	0	116	840	840
시 도 비	270	0	15	108	108
시군구비	630	0	35	252	252
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 용역 착수 : 2020. 03.

○ 공사 착공 : 2021. 07.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2022. 07.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

어촌뉴딜300사업(증도 검산항)

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3개년)

○ 위 치 : 신안군 증도면 우전리 일원

○ 규 모 : 기항지개선사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	0	150	1,200	1,200
국 비	2,100	0	105	840	840
시 도 비	270	0	15	108	108
시군구비	630	0	30	252	252
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 용역 착수 : 2020. 03.

○ 토지협의 완료 : 2021. 04.

○ 매장문화재 시굴조사 완료 : 2021. 06.

□ 향후계획

○ 공사 착공 : 2021. 09.

○ 공사 준공 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

어촌뉴딜300사업(안좌 자라항)

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3개년)

○ 위 치 : 신안군 안좌면 자라리 일원

○ 규 모 : 기항지개선사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	0	170	1,200	1,200
국 비	2,100	0	119	840	840
시 도 비	270	0	15	108	108
시군구비	630	0	34	252	252
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 실시설계 용역 착수 : 2020. 03.

○ 공사 착공 : 2021. 01.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2022. 03.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

압해 매화지구 연안정비사업

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연재해로부터 국토의 보존 및 기후변화에 따른 연안사고를 사전에 예방‧복원하여 쾌적한 연안환경을 조성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3개년)

○ 위 치 : 신안군 압해읍 매화리 일원

○ 규 모 : 호안 690m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,190	0	187	1,064	926
국 비	1,533	0	131	745	648
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	657	0	56	319	278
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시설계 용역 착수 : 2020. 01.

○ 공사 착공 : 2021. 04.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해양수산부 실시계획 협의시 총사업비 조정

(당초 사업비 : 2,330백만원, 변경 사업비 : 2,190백만원)

사업명

자은 내치지구 연안정비사업

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연재해로부터 국토의 보존 및 기후변화에 따른 연안사고를 사전에 예방‧복원하여 쾌적한 연안환경을 조성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3개년)

○ 위 치 : 신안군 자은면 백산리 일원

○ 규 모 : 침식방지울타리 3,570m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,714백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,714	0	187	1,429	1,785
국 비	2,600	0	113	1,000	1,250
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,114	0	49	429	535
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시설계 용역 착수 : 2020. 07.

○ 실시설계 용역 전문가 자문 : 2021. 07.

□ 향후계획

○ 공사 착공 : 2021. 09.

○ 공사 준공 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

도초면 농어촌폐기물처리시설 설치

담당자

세계유산과

노정열(☎061-240-8448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 설치 운영중인 매립시설 종료시점(매립율79%) 임박으로 도초면에서

발생하는 생활폐기물의 처리를 위해 시설확충이 시급한 실정임.

□ 사업개요

○ 기   간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.

○ 위   치 : 신안군 도초면 이곡리 14-5번지 일원

○ 규   모 : 매립시설 4,500㎡, 관리동 40㎡, 계근대 50톤

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,452백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,452	135	865	2,452
국 비	1,500	59	375	1,066
시 도 비	873	34	219	620
시군구비	1,079	42	271	766
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 기본계획 용역 : 2018. 02. 05. ~ 03. 06.

○ 실시설계 용역 : 2019. 01. 30. ~ 2020. 11.

○ 토질조사 용역 : 2019. 05. ~ 06.

○ 건축경관 심의용역(공공디자인 포함) : 2019. 09. ~ 11.

○ 주변토지 매입(4필지 12,252㎡, 192백만원) : 2019. 09.

○ 재해영향성검토 · 군관리계획 변경 : 2019. 12. ~ 2020. 06.

○ 소규모 재해영향평가 용역 : 2020. 05. ~ 08.

○ 소규모 환경영향평가 용역 : 2020. 05. ~ 10.

○ 총사업비 변경 승인(국비 12억 → 15억) : 2020. 08.

○ 폐기물 처분시설 변경승인 신청서 제출 : 2020. 09.

○ 시설공사 총괄 및 1차분 발주 : 2020. 11.

○ 시설공사 2차분 발주 : 2021. 03.

○ 시설공사 1차분 기성검사 : 2021. 05. 14.

□ 향후계획

○ 설치공사 준공 : 2021. 11.

○ 매립시설 설치검사 : 2021. 12.

○ 매립시설 사용개시 : 2022. 01.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

지도 장동~봉리간 농어촌도로 확포장공사

담당자

안전건설과 백세라(☎240-8473)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미개설된 농어촌도로 개설 시행으로 주민 도로 활용 편의와 관광지 개발에 따른 신규 교통수요 적기 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023

○ 위 치 : 신안군 지도읍 광정리 940-2~봉리 172-7번지 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 L=2.1㎞, B=7.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	0	0	200	4,800
국 비
시 도 비
시군구비	5,000	0	0	200	4,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 09. : 도로 사업계획 수립

○ 2020. 11. : 투자심사

○ 2020. 11 : 기본 및 실시설계 용역

□ 향후계획

○ 2021. 07 : 계약심사

○ 2021. 08 : 관련 인허가

○ 2021. 09 : 사업 착공

사업명

병어 공원 조성사업

담당자

해양수산과

박진석(☎240-8404)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1004대교 개통 및 여객선 야간운항, 수산물 축제와 함께 섬 방문 여행코

스에 병어공원을 조성함으로써 신안을 찾는 관광객에게 신안 수산물 홍

보 효과 및 판매 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 -~2022

○ 위 치 : 전남 신안군 지도읍 광정리 일원

○ 규 모 : 13ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000		104	736	3,160
국 비	2,000		52	368	1,580
시 도 비
시군구비	2,000		52	368	1,580
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2021. 01. : 병어 조형물 디자인 개발 및 실시설계 완료

○ 2021. 07. : 병어 공원 실시설계 완료 및 공원 주변 정비 추진 중

□ 향후계획

○ 2021. 08. 병어 공원 진입도로 부지 매입 및 조성사업 추진

○ 2022. 12. 병어 공원 준공 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경사항 : 위치, 면적, 사업내용

- 당초 : 신안군 지도읍 읍내리 일원, 5ha, 병어공원 조성

- 변경 : 신안군 지도읍 광정리 일원, 13ha, 라일락 공원 조성사업과 연계

하여 사업효과 증대 도모

사업명

간재미 공원 조성사업

담당자

해양수산과

박진석(☎240-8404)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1004대교 개통 및 여객선 야간운항, 수산물 축제와 함께 섬 방문 여행코

스에 간재미공원을 조성함으로써 신안을 찾는 관광객에게 신안 수산물 홍

보 효과 및 판매 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022

○ 위 치 : 전남 신안군 비금면 광대리 일원

○ 규 모 : 54ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000		26	586	1,400
국 비	1,000		13	293	700
시 도 비
시군구비	1,000		13	293	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

○ 2021. 05. : 간재미 공원 실시설계 완료

○ 2021. 06. : 공원부지 조성사업 및 나무 식재 사업 추진 중

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 간재미 공원 준공 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경사항 : 위치, 면적, 사업내용

- 당초 : 신안군 지도읍 읍내리 일원, 0.7ha, 간재미 공원 조성

- 변경 : 신안군 지도읍 광정리 일원, 54ha, 해당화 공원 조성사업과 연계

하여 사업효과 증대 도모

사업명

스마트양식 클러스터 조성사업

담당자

해양자원과 이동훈(☎240-8613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스마트양식 테스트베드 및 배후부지 조성으로 새우, 해삼의 스마트 양식 기술 개발을 통한 배후부지로 확산, 미래 스마트양식 기술 개발 및 생산성 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01 ~ 2023. 12

○ 위 치 : 신안군 지도읍 자동리 1988번지 일원

○ 규 모 : 스마트양식 클러스터 조성(77,896㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 41,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	41,600		4,700	16,900	20,000
국 비	22,000		1,700	10,300	10,000
시 도 비	3,600		300	1,500	1,800
시군구비	1,000		2,200	3,600	4,200
지 방 채
민간자본	6,000		500	1,500	4,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10  %)

○ 20. 01. 30 : 스마트양식 클러스터 조성사업 사업자 선정

○ 20. 03. 19 : 기본계획 수립 및 타당성 연구용역 계약체결

○ 20. 04. 01 ~ 20. 6. 30 : 지방재정 투자심사(행안부) 의뢰 및 완료

○ 20. 10. 05 : 기본계획 미 타당성 조사 용역 중지(재개 21. 4. 6)

○ 21. 04. 03 : 민간 사업자 사업포기

○ 21. 05. 03 : 스마트양식 클러스터 조성사업 기본계획 승인요청(군⇒해수부)

○ 21. 05. 30 : 배후부지 기본조사 및 실시설계용역 발주

○ 21. 06. 23 : 배후부지 기본조사 및 실시설계용역 계약체결

(계약금액 148,536천원, 계약업체 ㈜ 성우-광주소재)

□ 향후계획

○ 2021. 12월중 배후부지 착공(완료 2022. 12월)

○ 2021. 10월중 테스트베드 기본 및 실시설계용역 착공(완료 22. 8월)

○ 2022. 09월중 테스트베드 착공(완료 23. 10월)

□ 사업변경 내역

○ 사업계획 변경 : 당초) 민간자본보조 ⇒ 변경) 시설비(신안군 직접운영)

- 민간사업자 사업포기에 따른 사업계획 변경

○ 사업기간 연장 : 당초) 2022. 12월 ⇒ 변경) 2023. 12월

○ 사업지구 면적 축소 : 당초) 77,896㎡ ⇒ 변경) 67,408㎡

- 당초 민간사업자 수익등을 고려, 사업부지 추가확대 추진예정이었으나,   민간사업자 포기에 따른 사업부지 축소

사업명

신안군 보조축구장 조성사업

담당자

행정지원과 맹진석(☎240-8256)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보조축구장 조성을 통한 주민 및 동호회 체육활동 여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 2.

○ 위 치 : 신안군 압해읍 학교리 511 일원

○ 규 모 : 잔디구장 105m*68, 주차장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000		550	600	850
국 비	400		189	200	11
시 도 비
시군구비	1,600		361	400	839
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 지방재정투자심사 조건부 승인 (2020. 3.)

○ 실시설계 용역 완료 (2020. 12.)

○ 문화재 발굴조사 완료 (2021. 5)

○ 공사 착공 (2021. 6.)

□ 향후계획

○ 공사 완료 및 준공 (2022. 2.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 문화재 발굴 등에 따른 사업기간 연장

사업명

신안군 생활밀착형 국민체육센터 건립

담당자

행정지원과 맹진석(☎240-8256)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중부권 주민의 다양한 체육, 문화 수요 충족 및 아동청소년 복지 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 7. ~ 2024. 1.

○ 위 치 : 신안군 암태면 단고리 970-1 일원

○ 규 모 : 수영장, 청소년 문화의집, 작은도서관, 작은영화관

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,800		111		19,689
국 비	6,498		111		6,387
시 도 비	150				150
시군구비	13,152				13,152
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 공공건축심의 완료 (2020. 4.)

○ 지방재정투자 재심사 조건부 승인 (2020. 7.)

○ 설계공모 완료 (2020. 7.)

□ 향후계획

○ 실시설계 용역 (2021. 11.)

○ 공사 착공 (2022. 7.)

○ 공사 완료 및 준공 (2024. 1.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 실시설계 계약 지연에 따른 사업기간 연장

사업명

신안군 근린생활형 국민체육센터 건립

담당자

행정지원과 맹진석(☎240-8256)

□ 사업목적 및 필요성

○ 비금면 주민의 체육, 문화, 복지 수요 충족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 11.

○ 위 치 : 신안군 비금면 덕산리 20-5

○ 규 모 : 다목적 체육관, 공중목욕탕

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3500		24	326	3,150
국 비	1700		24	326	1,350
시 도 비	210				210
시군구비	1590				1,590
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 공유재산심의 완료 (2020. 9.)

○ 지방재정투자심사 조건부 승인 (2020. 10.)

○ 공공건축 심의 완료 (2020. 11.)

○ 사업부지 성토공사 (2020. 12.)

○ 실시설계 용역 계약 (2021. 3.)

□ 향후계획

○ 계약 심사 (2022. 2.)

○ 공사 착공 (2022. 3.)

○ 공사 완료 및 준공 (2023. 3.)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

신안군체육회장기 체육대회 지원

담당자

행정지원과 김지만(☎240-8367)

□ 사업목적 및 필요성

○ 춘계 종합체육대회 개최를 통한 주민 건강 증진 및 체육활동 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3. (매년 반복)  ※코로나19로 대회 취소

○ 위 치 : 신안군 압해읍 일원

○ 규 모 : 체육동호인 2,000명 참여

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	-	-	-	-	150
국 비
시 도 비
시군구비	-	-	-	-	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 코로나19 확산에 따른 체육행사 취소

□ 향후계획

○ 2021년도 체육대회 개최 취소

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 코로나19로 인한 2020년 체육행사 취소

사업명

신안군수기 체육대회 지원

담당자

행정지원과 김지만(☎240-8367)

□ 사업목적 및 필요성

○ 추계 종합체육대회 개최를 통한 주민 건강 증진 및 체육활동 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 11. (매년 반복)  ※코로나19로 대회 취소

○ 위 치 : 신안군 압해읍 일원

○ 규 모 : 체육동호인 2,000명 참여

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	150	-	-	150	150
국 비
시 도 비
시군구비	150	-	-	150	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 코로나19 확산에 따른 체육행사 취소

□ 향후계획

○ 2021년도 체육대회 개최 예정 (2021. 11.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 코로나19로 인한 2020년 체육행사 취소

사업명

1004섬 신안 국제시니어 바둑대회

담당자

행정지원과 김종민(☎240-8038)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제 바둑대회 개최를 통하여 국제교류 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. ※코로나19로 대회 취소

○ 위 치 : 신안군 증도면 일원

○ 규 모 : 300명 (선수 16명, 군민바둑축제 200명 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 295백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	313		18	295
국 비
시 도 비	15			15
시군구비	298		18	280
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

○ 국내선발전 진행하였으나 이후 코로나19로 인하여 순연 결정

□ 향후계획

○ 2021년 국제 시니어 바둑대회 개최 예정 (2021. 9.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2020년 사업비 510백만원(도 10백만원)

○ 2021년 사업비 295백만원(도 15백만원)  ※ 군비 부담 감액

사업명

김환기미술관(플로팅뮤지엄)건립

담당자

맛예술문화과 김원주(☎240-8044)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건립사업 추진으로 문화향유권 증진과 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~2022년

○ 위 치 : 신안군 안좌면 읍동리 읍동리(신촌저수지) 일원

○ 규 모 : 건축면적 1,588.78㎡(연면적 1,573.70㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,800	400	469	4,608	4,323
국 비
시 도 비
시군구비	9,800	400	469	4,608	4,323
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

○ 2020.10 : 지방재정투자심사 완료

○ 2021.03 : 예술작품 제안서 접수

○ 2021.05 : 예술작품 감정기관 시가평가

○ 2021.06 : 전시물품 수집 및 임차 심의 완료

○ 2021.06 : 플로팅뮤지엄(푼툰제작설치) 관급자재 착수

□ 향후계획

○ 2021.08 : 대상작가 MOU 협약

○ 2021.08 : 플로팅뮤지엄(푼툰,건축,통신,전기,소방) 착공

○ 2022.10 : 플로팅뮤지엄건립공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

세계해태상테마공원조성사업

담당자

맛예술문화과 김원주(☎240-8044)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사업 추진으로 문화향유권 증진과 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~2022년

○ 위 치 : 신안군 안좌면 읍동리 읍동리 691 일원

○ 규 모 : 유리온실 1식, 토피어리 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,442백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,442	308	0	932	1,202
국 비	1,325	185		539	601
시 도 비
시군구비	1,117	123	0	393	601
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)

○ 2017.10 : 테마전시관 신축공사 착공

○ 2020.06 : 지방재정투자사업 심사완료(재심사/신안군)

○ 2020.08 : 사업계획 변경 승인 완료(문화체육관광부)

○ 2021.04 : (변경)실시설계용역 완료

○ 2021.06 : 사업재개

□ 향후계획

○ 2022.10 : 테마전시관 신축공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

대지의문화시설조성

담당자

맛예술문화과 김원주(☎240-8044)

□ 사업목적 및 필요성

○문화시설을 조성하여 문화향유권 증진과 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~2022년

○ 위 치 : 신안군 도초면 지남리 산2번지 (수국공원) 일원

○ 규 모 : 명상공간 1식, 조망시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,600	0	0	1,180	4,420
국 비
시 도 비
시군구비	5,600	0	0	1,180	4,420
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2020.10 : 지방재정투자사업 심사완료

○ 2020.10 : 도시계획 시설결정 고시(공원)

○ 2021.03 : 예술작품 제안서 접수

○ 2021.05 : 예술작품 감정기관 시가평가

○ 2021.06 : 전시물품 수집 및 임차 심의 완료

□ 향후계획

○ 2021.08 : 대상작가 MOU 협약

○ 2021.10 : 실시설계용역 완료 및 문화시설 조성사업 착공

○ 2022.10 : 문화시설 조성사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

1004섬길역 조성사업

담당자

맛예술문화과 강선희(☎240-8045)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천사대교 개통 이후 급증 관광객 수용 및 신규 수요 창출에 따른 대책

○ 지역특화 자원 활용 주민소득 및 일자리 창출 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~2023. 12.

○ 위 치 : 신안군 암태면 신석리 1-3외 6필지,

신안군 자은면 백산리 633-98외 3필지

○ 규 모 : H/W 2개소(암태, 자은), S/W 4개소(암태, 자은, 안좌, 팔금)

관광문화복합공간 조성(2개소), 컨텐츠 개발, 홍보, 메뉴 개발 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,000	0	0	1,200	10,800
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	5,000	0	0	500	4,500
시군구비	7,000	0	0	700	6,300
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○2021.06. : 1004섬길역 암태천사섬역 기본구상 용역 완료

○2021.04.~: 1004섬길역 암태천사섬역 실시설계 용역 추진 중

□ 향후계획

○ 2021.09.~: 1004섬길역 자은 땅콩랜드 기본 및 실시설계 용역 추진

○ 2022.01.~: 1004섬길역 공사 착수

□ 사업변경 내역

○ 투자심사 H/W 3개소(자은, 암태, 팔금) → 변경 H/W 2개소(자은, 암태)

10-2. 지방채 발행사업

우리 신안군에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
군단위LPG 배관망지원사업	13,076	3,000	3,538	863	4,797	878	3,000	95
지방상수도현대화사업	30,676	3,100	15,338	-	12,238	-	3,100	96
도서식수원개발사업	67,200	4,000	47,040	6,048	10,112	-	4,000	50
어촌뉴딜300사업	44,828	5,300	14,120	1,815	2,215	-	5,300	60
어촌뉴딜300사업(20년선정)	58,130	3,500	10,514	1,352	-	-	3,500	20
지방관리방조제보수공사	6,102	2,400	3,051	610	41	-	2,400	62
천일염 종합유통센터 건립사업	15,000	3,500	7,500	-	4,000	-	3,500	2

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2020년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

군단위LPG배관망지원사업

담당자

경제에너지과 박세영(☎240-8266)

□ 사업목적 및 필요성

○도시가스 미공급 지역에 LPG탱크 및 배관망 설치를 지원하여 도시가스 수준의 연료 사용 환경을 구축하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021(3개년)

○ 위 치 : 지도읍 일원

○ 규 모 : 17개 마을, 약 1,100세대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,328백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,328
지 방 채	3,000		3,000	-	-
국 비	6,664	3,126	3,538	-	-
시 도 비	863		863	-	-
시군구비	7,298	2,501	4,797	-	-
기 타	1,503	625	878	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 16개 마을 시공 완료, 12개 마을 공급 中

○ 공정률 95% 이상 달성

□ 향후계획

○ ‘21. 9.  잔여마을 공사 완료

○ ‘21. 11. 전체 마을 가스 공급 개시

○ ‘21. 12. 준공 및 정산

□ 사업변경 내역(해당시)

○ (당초) ‘19. 7.  사업규모 11개마을 2,400세대, 사업비 15,630백만원

○ (변경) ‘20. 11. 사업규모 17개마을 1,100세대, 사업비 19,328백만원

사업명

지방상수도현대화사업(보조)

담당자

상하수도사업소 김현승

(☎240-8496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 상수관망 정비로 녹물발생, 이물질 유입 예방 등 안전한 수돗물 공급,        누수 저감을 통한 안정적 수돗물 공급 및 가뭄 대응, 블록 및 유지관리시스템       도입을 통한 지방상수도 운영·관리 선순환 구조를 구축하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2022

○ 위 치 : 7개면(자은, 암태, 안좌, 팔금, 비금, 도초, 흑산)

○ 규 모 : 노후관망 정비 38km(배수관 31.6km, 급수관 7.1km)

블록시스템 구축 48개소(대11, 중14, 소23)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,676백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	30,676	16,636	11,204	1,418	1,418
지 방 채	3,100	-	3,100	-	-
국 비	15,338	9,318	4,602	709	709
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,238	7,318	3,502	709	709
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  96 %)

○ 관망정비 56.3km 중 54.2km 완료

○ 유수율 88.8% 달성

○ 블록시스템(소블럭) 23개소 구축

□ 향후계획

○ 관망정비 잔여물량(2.1km) 완료를 통한 누수 저감

○ 유량감시 강화 및 누수감시센서 활용, 탐사·복구 지속 수행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

도서식수원개발사업(보조)

담당자

상하수도사업소 강기성

(☎240-8489)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천사대교 완공 이후 관광인구 증가와 호텔·리조트·연수원 등 관광기반시설       신축에 따라 급증한 급수 수요에 대응한 중부권역에 안정적인 광역상수도       공급사업 조기 완공이 절실히 요구됨

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2025

○ 위 치 : 신안군 14개읍면

○ 규 모 : 광역상수도 송수관로 매설 및 도서지역 식수원 개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 67,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	67,200	24,755	16,703	9,203	16,539
지 방 채	4,000	-	4,000	-	-
국 비	47,040	17,328	8,454	7,600	13,658
시 도 비	6,048	2,228	1,213	932	1,675
시군구비	10,112	5,199	3,036	671	1,206
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50 %)

○ 2019. 06. : 중부권 광역상수도 1단계(압해 학교 ~ 압해 매화) 사업 착수

○ 2021. 03. : 임자지구 도서식수원개발사업 준공

○ 2021. 05. : 안좌·팔금 원산(오동2제) 도서식수원개발사업 준공

□ 향후계획

○ 2021. 08 : 중부권 광역상수도 2단계(압해 매화 ~ 증도 소악) 사업 착수

○ 2021. 09 : 중부권 광역상수도 3단계(증도 소악 ~ 암태 오도) 실시설계 착수

○ 2025. 12 : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

어촌뉴딜300사업

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021(3개년)

○ 위 치 : 신안군 임자면 진리항, 하우리항, 흑산 만재항, 암태 생낌항 일원

○ 규 모 : 방파제, 선착장, 부잔교, 어구보관창고, 산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,828백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	44,828	8,349	23,146	8,968	0
국 비	31,379	8,157	15,294	6,277	0
시 도 비	4,035	163	1,769	808	0
시군구비	9,414	29	6,083	1,883	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 05.

○ 기본계획 승인 고시 : 2012. 12.

○ 공사 착공 : 2019. 12.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

어촌뉴딜300사업(20년선정)

담당자

섬발전진흥과 주양오(☎240-8418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화, 생활밀착형 인프라 현대화 등을 통한 어촌 주민 삶의 질 제고 및 국가 균형 발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3개년)

○ 위 치 : 신안군 흑산면 다물대둔항, 암태 당사항, 오도항, 추포항, 임자 재원항 일원

○ 규 모 : 방파제, 선착장, 선박계류시설, 공동작업장, 산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 58,130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	58,130	0	15,021	23,252	19,847
국 비	40,691		10,515	16,276	13,890
시 도 비	5,231		1,352	2,093	1,787
시군구비	12,208		3,154	4,883	4,170
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2020. 05.

○ 기본계획 승인 고시 : 2020. 12.

○ 공사 착공 : 2021. 04.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해양수산부 2020년 어촌뉴딜사업 대상지 총사업비 조정

(당초 사업비 : 60,083백만원, 변경 사업비 : 58,130백만원)

사업명

지방관리방조제 개보수공사(보조)

담당자

안전건설과 황길복(☎240-8742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 방조제의 제방, 배수갑문 및 부속시설을 사전에 보수·보강하여   시설물의 붕괴와 파손을 사전에 방지하고 자연재해 시 바닷물 유입으로  부터 농경지를 보호하여 안전영농 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.01. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 신안군 일원

○ 규 모 : 안좌 덕대지구 지방관리방조제 외 24개 지구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,372백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	20,372	1,738	6,102	12,532	-
지 방 채	2,400	-	2,400	-	-
국 비	10,186	869	3,051	6,266	-
시 도 비	2,037	174	610	1,253	-
시군구비	5,749	695	41	5,013	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

○ 20. 10.  18년 계속지구 준공(안좌 덕대)

○ 20. 12.  19년 지구 1차분 준공 및 관급자재, 20년 지구 세부설계용역 준공

○ 21. 06.  19・20년 지구 준공 및 관급자재 집행

□ 향후계획

○ 21. 12.  19・20년 계속지구 준공 및 관급자재 집행 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

천일염 종합유통센터 건립

담당자

천일염지원과 김대영(☎240-8555)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제기준에 맞는 수출제품을 생산하고 안정적인 생산□관리체계를 구축하여

판로확대 및 유통구조 개선을 통한 경쟁력 강화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.(5개년)

○ 위 치 : 전라남도 신안군 압해읍 송공리 875번지 일원

○ 규 모 : 조성면적-15,000㎡, 건축공사-5,490㎡(공장동, 판매동, 검사동, 창고동 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,000	206	82
지 방 채	3,500			1,750	1,750
국 비	7,500	103	41	3,750	3,606
시 도 비
시군구비	4,000	103	41	2,000	1,856
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2019. 11. 천일염 종합유통센터건립 설계공모 완료

○ 2019. 11. 천일염 종합유통센터건립 기본 및 실시설계 용역 추진

○ 2020. 07. 천일염 종합유통센터건립 경관심의 완료

○ 2021. 07. 천일염 종합유통센터건립 실시설계 계약심의

□ 향후계획

○ 2021. 08. 천일염 종합유통센터건립사업 발주

○ 2022. 06. 천일염 종합유통센터건립사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 신안군에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후
BTL		해	당	없	음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비