11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 군에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률(%)
임자 만구음관 복원 조성사업	4,800	681	877	3,242	2016	2011	80%
예술의 섬 조성	9,000	1,895	2,435	4,670	2016	2011	50%
김환기미술관 건립	13,000	282	228	12,490	2016	2011	0%
세계 생태수도 섬 조성	12,000	1,000	1,800	9,200	2017	2012	20%
증도 도덕도 해양 펜션단지 조성	27,400	7,200	800	19,600	2017	2012	20%
임자 전장지구 농어촌마을하수 도정비사업	8,369	0	1,143	7,226	2016	2013	20%
비금․도초 면단위 하수처리장 설치사업	16,426	0	428	15,997	2016	2013	0%

▸ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

임자 만구음관 복원조성

담당자

문화관광과 최성원

(☎240-8978)

□ 사업목적 및 필요성

○ 조선시대 시․서․화 3절의 대가로 활약한 조희룡 선생의 흔적을

복원하여 문화콘텐츠 확보와 학습의 장으로 활용

□ 사업개요

○ 기간 : 2011～2016

○ 위치 : 신안군 임자면 이흑암리

○ 시공사 : 부성종합건설(주)

○ 사업규모 : 5,000㎡조성(만구음관 복원, 공원조성, 부대시설 등):

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,800	681	877	2,025	1,217
국 비	2,880	409	526	1.215	730
시 도 비
시군구비	1,920	272	351	810	487
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80%)

○ 계약 및 착공 : 2013. 02

○ 사업완료 : 2015. 12

□ 향후계획

○ 준공예정 : 2014년 12월

사업명

예술의 섬 조성

담당자

문화관광과 최성원

(☎240-8978)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국을 대표하는 서양화가 김환기 화백의 고향인 안좌도를 문화 예술의

고장으로 조성하여 지역 이미지 제고 및 다양한 콘텐츠 개발을 통한 지역경제

활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : 2013. 05. 01 ~ 2016. 12.

○ 위치 : 신안군 안좌면 일원

○ 시공사 : (주)청한

○ 사업규모 : 예술창작공방 리모델링(안창초등학교), 지역문화콘텐츠,

역사의 시간, 상징조형물 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	9,000	1,895	2,435	2,336	2,334
국 비	5,400	1,137	1,461	1,402	1,400
시 도 비
시군구비	3,600	758	974	934	934
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2011. 05 : 기본계획 용역 완료

○ 2011. 10 : 투융자심사 완료

○ 2012. 12 : 실시설계 용역 완료

○ 2013. 05 : 시설사업(건축․토목․조경) 1차분 착공

○ 2014. 06 : 시설사업(건축․토목․조경) 1차분 준공

○ 2014. 06 : 시설사업(건축․토목․조경) 2차분 착공

□ 향후계획

○ 준공예정 : 2016년 12월

사업명

김환기미술관 건립

담당자

문화관광과 최성원

(☎240-8978)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국을 대표하는 서양화가로서 신안군 안좌면 출신 수화 김환기 화백의

가치를 국내․외 확산 문화예술의 대표 고장으로서 위상강화를 통해 지역

이미지 제고 및 다양한 콘텐츠개발을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2009. ～ 2016.

○ 위  치 : 신안군 안좌면 읍동리 730

○ 시공사 : 미 발주(실시설계 : 디자인캠프 문박 디엠피)

○ 사업규모 : 김환기 미술관, 주변공원 정비, 기획전시실, 상설전시실,

교육실, 체험실, 홍보실, 주차장, 휴게실등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	13,000	282	228	0	12,490
국 비	2,300	37	228	0	2,035
시 도 비
시군구비	10,700	245	0	0	10,455
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2011. 12 : 타당성조사 및 기본용역 완료

○ 2012. 03 : 투융자 심사 완료

○ 2013. 06 : 제안공모(협상에 의한 계약)발주

○ 2012. 12 : 실시설계 착수보고회

○ 2014. 04 : 실시설계 완료 후 계약심사

○ 2015. 09 : 사업발주

□ 향후계획

○ 준공예정 : 2016년 12월

사업명

세계 생태수도 섬 조성

담당자

환경공원과 박용건(☎240-8441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도초도를 생태교육과 생태관광이 결합된 생태체류형 관광지로 조성하여

지역경제 활성화와 세계에 신안을 알리는 계기마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 신안군 도초면 일원

○ 규 모 : 세계 생태수도 섬 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계
국 비	6,000	500	900	500	4,100
시군구비	6,000	500	900	500	4,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ '13. 10 : 세계 생태수도 섬 선포식

○ '14. 01 : 세계 생태수도 섬 마스터플랜 수립

○ '14. 04 : 방문자센터 준공

○ '14. 12 : 생태교육 프로그램 생태해설가 양성

○ '15. 04 : 운동장 계단 데크 준공

○ '15. 06 : 세계 생태수도섬 숙소동, 식당동 준공

□ 향후계획

○ ‘15년 : 세계 생태태수도 섬 방문자센터 주변정비공사 및 전시물 제작설치, 수생식물 학습장 조성, 생태교육 탐방로 조성, 환경부 환경교육프로그램 응모, 전라남도 환경교육센터 유치

○ ‘16년 이후 : 갯벌 체험장·철새탐조 학습장·해안지오파크 조성, 전라남도 교육청 자율학기 생태학습장 운영 MOU체결, 생태학습 수련회 및 생태캠프 운영, 생태교구제작 목공방 운영, 쪽 천연염색·전통차 생산 및 체험·판매 시설 운영, Eco City 조성

사업명

증도 도덕도 해양리조트 조성사업

담당자

경제투자과 박희정

(☎240-8332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 활성화를 통한 국민 여가 증진과 지역 경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2017

○ 위 치 : 신안군 증도면 방축리 도덕도 일원

○ 규 모 : 리조트, 수상가옥, 마리나, 유물전시관등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	27,400	7,200	800	800	18,600
국 비	2,000	1,200	800	-	-
시 도 비
시군구비	2,000	1,000	-	800	200
지 방 채
민간자본	23,400	5,000	-	-	18,400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 사업추진을 위한 토지매입 및 지구단위계획, 환경성협의 완료

○ 사업경제성 확보를 위한 지구단위계획 변경 협의중

□ 향후계획

○ 지구단위계획 변경협의(2015. 10)

○ 사업 본격 착수(2015. 11)

사업명

임자 전장지구 농어촌마을하수도정비사업

담당자

상하수도사업소

설진준(☎240-8747)

□ 필요성 및 기대효과

○ 임자면 전장지구에서 배출되는 생활오․폐수를 정화하여 수질오염방지 및 생활환경 개선을 도모

○ 면소재지에서 발생되는 생활하수로 급속도로 오염되어가고 있는 주변 환경오염 방지와 건전한 도시발전

□ 사업개요

○ 기간 : 2014～2016

○ 위치 : 신안군 임자면 도찬리 일원

○ 사업규모 : 소규모공공하수처리시설 1개소(Q=100㎥/일),

오수관거 신설 L=4.96km, 오수중계펌프장 3개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,369백만원(환특5,858, 시군비 2,511)

구 분	총 괄	2014년	2015년 계획	2016년 이후	비고
총사업비	8,369	1,143	3,033	4,193
국 비	5,858	800	2,123	2,935
지 방 비	2,511	343	910	1,258

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 계약 및 착공 : 2014. 12

○ 사업완료 : 2016. 11

□ 향후계획

○ 준공예정 : 2016년 11월

□ 사업변경 내역

○ 환경부 총사업비 변경완료(당초 4,176백만원 → 변경 8,369백만원)

사업명

비금·도초 면단위

하수처리장 설치사업

담당자

상하수도사업소

설진준 (☎240-8747)

□ 필요성 및 기대효과

○ 비금면 도고2지구, 도초면 나포지구에서 배출되는 생활 오․폐수를 정화하여 수질오염방지 및 생활환경 개선을 도모

□ 사업개요

○ 기간 : 2014~2016

○ 위치 : 신안군 비금면 지당리, 도초면 외남리 일원

○ 사업규모 : 처리장 - 비금 150㎥/일, 도초 65㎥/일

오수관로 – 비금 13.87㎞, 도초 4.78㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,426백만원(국비 11,498, 지방비 4,928)

구 분	총 괄	2014년	2015년 계획	2016년 이후	비고
총사업비	16,426	428	5,399	10,598
국 비	11,498	300	3,779	7,419
지 방 비	4,928	128	1,620	3,179

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 계약 및 착공 : 2015. 02

○ 사업완료 : 2018. 01

□ 향후계획

○ 준공예정 : 2018년 01월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

11-2. 지방채 발행사업

우리 군에서 ‘14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

⇒ 해당없음

11-3. 민간투자사업

우리 군에서 ‘14년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’13년까지 부담액	’14년 부담액	’15년 이후 부담 예정액
BTL	해 당 없 음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2014년까지는 집행액(결산기준), 2015년 이후는 추정액

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

⇒ 해당없음