9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투융자심사 대상사업

우리 신안군에서 ‘15년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률(%)
신안 문화 예술회관 건립	8,000	0	0	8,000	2018	2013	0
국토 끝섬 관문 관광자원화 조성	9,800	0	0	9,800	2017	2014	5
해치(해태)상 테마 공원 조성	3,855	0	14	3,841	2018	2015	10
증도면 농어촌 폐기물소각시설 설치	2,200	1,016	1,184		2017	2015	18%
증도~자은간 여객선건조사업	3,500			3,500	2016	2015	100%

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

신안 문화예술회관 건립

담당자

문화관광과 김해석(☎240-8352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화예술회관 및 문화원을 건립하여 군민들의 문화 향유 및 삶의 질

향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 전남 신안군 암태면 단고리 967번지 일원

○ 규 모 : 2,700㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	800			44	756
국 비	360				360
시 도 비
시군구비	440			44	396
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 2016년 5월 문화예술회관.문화원 건립 기본운영계획 및 타당성 검토 용역

□ 향후계획

○ 2016년 10월 공유재산관리계획 심의

○ 2016년 11월 지방재정 투자 심사

○ 2017년 1월 사전평가 자료 제출(문체부)

○ 2017년 3월 한국문화예술회관연합회 및 문화원건립 현지 실사

○ 2017년 6월 2018년 지특 신청

사업명

세계 해태상 테마공원 조성

담당자

문화관광과 서강린(☎240-8786)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선과 악을 구별하고 정의로우며, 화재나 재앙을 물리치는 상상의 동물 해태(해치)를 콘텐츠로 테마공원을 조성하여 섬 관광산업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018(3개년)

○ 위 치 : 신안군 안좌면 읍동리 641번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 111,166㎡, 건축연면적 1,445㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,855백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,855
국 비	2,280			500	1,780
시 도 비
시군구비	1,575		14	374	1,187
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘15.  4. : 해태상 등 전시예정품 영구기탁 협약체결

○ ‘16.  6. : 타당성검토 및 기본계획 용역 완료

○ ‘16.  7. : 건축물 계획설계(디자인) 용역 완료

□ 향후계획

○ ‘16.  8. ~ 12. : 건축물 실시설계 용역

○ ‘16. 10. ~ 12. : 전시물 설계

○ ‘16. 12. ~    : 전시관 및 부속시설 착공, 전시물 제작․설치 착수

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업규모	부지면적 : 5,000㎡ 건축연면적 : 850㎡	부지면적 : 111,166㎡ 건축연면적 : 1,200㎡
총사업비	3,800백만원	3,855백만원
사업기간	2015~2017	2016~2018

사업명

국토 끝섬 관문관광자원화 조성

담당자

문화관광과 고현욱(☎240-8979)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국토 최서남단네 위치한 가거도를 차별화된 섬관광 자원으로 개발하여

한국 대표섬으로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 전남 신안군 흑산면 가거도리 일원

○ 규 모 : 10,000㎡

- 해양친수공간, 관광편의시설, 가족야영장, 생태탐방로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,800			500	9,300
국 비	4,900			300	4,600
시 도 비
시군구비	4,900			200	4,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2014. 02. 지방재정투융자 심사 완료

○ 2015. 12. 테마공원조성사업 실시 계획 용역 완료

○ 2016. 08. 테마공원조성사업 계약 및 착공

□ 향후계획

○ 2016. 12. 테마공원조성사업 완료

○ 가거도 국가어항 건설사업 추진 중

사업명

증도면 농어촌 폐기물소각시설 설치

담당자

환경공원과 정정혜

(☎240-8448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 증도면 생활폐기물의 안정적이고 위생적인 소각처리를 통한 환경오염 저감 및 쾌적한 생활보전

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015～2017

○ 위    치 : 신안군 증동리 730-66번지

○ 시 공 사 : 발주 전

○ 사업규모 : 소각로(기계) 1기 300kg/hr, 소각시설(건축) 1동 A=550㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,200	0	1,016	1,184	0
국 비	1,500	0	711	789	0
시 도 비
시군구비	700	0	305	395	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  18%)

○ 기본계획보고서 완료 : 2014. 05.

○ 편입토지 대토협의 완료 : 2015. 06.

○ 소각로 구매제작설치 계약 완료 : 2015. 09.

○ 전략환경영향평가용역 외 5개용역 계약 완료 : 2015. 09.

○ 전라남도 계약심사 완료 : 2016. 04.

□ 향후계획

○ 신안군 경관심의 및 영산강청 협의 완료 : 2016. 08.

○ 전략환경영향평가용역 외 4개 용역 완료 : 2016. 08.

○ 시설공사 발주 의뢰 : 2016. 09.

○ 시설사업 계약체결 및 착공 : 2016. 09.

○ 준공 및 시운전 : 2017. 12.

사업명

증도~자은간 여객선 건조사업

담당자

도서개발과 김용수

(☎240-8467)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신안군 전 관내가 소통되는 십자형 도로망을 구축, 군민과 관광객이 목포를 경유하지 않고 자유롭게 관내 이동이 가능하도록 추진

○ 증도-자은간(지방도 805호선) 연륙교량 조기 착공을 위한 통계자료 확보 및 체류관광 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 9. 21 ~ 2016. 7. 16

○ 위 치 : 증도면 왕바위선착장 ~ 자은 고교선착장 운항

○ 규 모 : 281톤급(여객정원 150명) 여객선 1척 건조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,500			3,500
국 비
시 도 비
시군구비	3,500			3,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 여객선 건조 계약체결 : 2015. 9. 21

○ 해상여객운송사업 면허 취득 : 2016. 5. 23

○ 여객선 건조 완료 : 2016. 7. 16

□ 향후계획

○ 여객선 취항 : 2016. 8월말 예정

9-2. 지방채 발행사업

우리 신안군에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황(해당없음)

9-3. 민간투자사업

우리 신안군에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
BTL		해 당	없 음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황(해당없음)