109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 신안군에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
다기능 수산물 위판장 건립사업	5,000	-	750	4,250	2019	2016년 (2차)	10
어촌힐링 테마공원 조성	700	-	400	300	2018	2017년 (2차)	0
지도읍 농어촌폐기물 설치	2,400	236	1,269	895	2018	2017	100
가고 싶은 섬 반월·박지도 가꾸기 사업	4,000	1,600	800	1,600	2019	2016	70
350톤급 여객선 건조	5,000	-	-	5,000	2018	2017	10
신안 고둥(패류) 전시관 건립	3,500	-	2,150	1,350	2019년	2016년 (2차)	50%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

다기능 수산물 위판장 시설사업

담당자

해양수산과 박현욱(☎240-8910)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 청정해역에서 생산되는 수산물의 유통망 구축으로 안전하고

위생적인 수산물을 적기 공급하여 어업인 소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019(계속사업)

○ 위 치 : 압해읍 송공리 718-64(매립 1지구)

○ 규 모 : 다기능 수산물 위판장(연면적 4,362㎡, 1동 2층)

○ 내 용 : 수산물 위판장, 냉동‧냉장 보관시설, 활어수조, 어업인 편의시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,000백만원(균특 2,000, 군비 1,500, 수협 1,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000	-	750	2,000	2,250
국 비	2,000		300	800	900
시 도 비
시군구비	1,500		225	600	675
지 방 채
민간자본	1,500		225	600	675
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017. 03.  : 사업자 선정 및 보조금 교부결정(1차)

○ 2018.03.20. : 보조금 교부결정(2차)

○ 2018.04.02.~09.28. : 기본 및 실시설계용역

□ 향후계획

○ 2018. 09. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2018. 11. : 전남도 계약심사 및 공사입찰 완료

○ 2018. 12. : 사업 착공

○ 2019. 12. : 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

어촌힐링 테마공원 조성

담당자

해양수산과 신상수(☎240-8403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌의 다양한 자원을 기반으로 어촌체험‧관광 중심의 산업화를

촉진하고 지역의 경제활동 다각화와 소득, 고용기회 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2018(계속사업)

○ 위 치 : 암태도 당사도 일원(마을생활개선 패키지 사업과 연계)

○ 내 용 : 산책로, 탐방로, 전망대, 개체굴 체험장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  700백만원(국비 300, 군비 400)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	700	-	400	300	-
국 비	300		200	100
시 도 비
시군구비	400		200	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2016. 06. : 어촌자원복합산업화 사업 전남도 균특인센티브 사업신청

○ 2016. 07. : 어촌힐링테마공원 선정

○ 2017. 03. : 어촌힐링테마공원 사업지구 변경(안좌 한운→암태 당사)

○ 2017. 09. : 암태 당사지구 어촌힐링테마공원 실시설계용역 추진

○ 2018. 02. : 용역 중지결정(지역주민 의견수렴 및 사업계획변경 등)

□ 향후계획

○ 2018. 07. : 사업계획 변경 등 지역주민 의견 수렴 후 설계용역 추진

○ 2018. 08. : 설계용역 완료 후 사업 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 어촌힐링테마공원 사업지구 변경(안좌 한운→암태 당사)

- 안좌 해양쓰레기 처리시설사업과 연계추진 중 쓰레기 처리장 설치 무산으로 변경

사업명

지도읍 농어촌폐기물 설치

담당자

환경녹지과 이건욱(☎240-8449)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 소각시설 노후 및 소각시설 용량부족, 대기오염물질 배출허용기준 강화로 소각시설의 확충으로 가연성폐기물의 안정적이고 위생적 소각처리로 환경오염 저감과 환경을 쾌적하게 보전, 주민의 생활환경 개선코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2018년

○ 위 치 : 전남 신안군 지도읍 봉리 1365-1번지 일원

○ 규 모 : 소각동(499.5㎡), 소각용량(300kg/hr),

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계		236	1,269	895	0
국 비	1,500	235	748	516	0
시 도 비
시군구비	900	1	521	379	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 03. : 기본계획보고서 완료

○ 2016. 05. : 소각로 구매제작설치 계약 완료

○ 2016. 07. : 실시설계 완료

○ 2016. 08. : 도 계약심사 완료

○ 2016. 10. : 시설사업 착공

○ 2018. 02. : 폐기물소각시설 사용개시 신고 수리(전라남도)

○ 2018. 03. : 시설공사 완료(건축, 전기, 통신, 소방) 완료

○ 2018. 06. : 농어촌폐기물 처리시설 안전시설(소각) 보강공사 완료

○ 2018. 07. : 농어촌폐기물 처리시설 사용승인 완료

□ 향후계획

○ 2018. 08. ~ : 사업비 정산 추진(환경부)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

가고싶은섬 반월·박지도 가꾸기 사업

담당자

도서개발과 김현아(☎240-8758)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 지역의 자연 환경을 보존하고 관광기능을 도입하여 지역사회 발전과       관광 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 신안군 안좌면 반월·박지도 일원

○ 내 용 : 경관 및 건축물관리, 편의시설, 해안 및 마을정비, 산책로 등산로개설,              홍보 및 마케팅, 주민역량강화교육, 마을기업육성, 관광서비스개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,000	1,600	800	800	800
국 비
시 도 비	2,000	800	400	400	400
시군구비	2,000	800	400	400	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70 %)

○ 2015. 09. 기본계획수립 용역 완료

○ 2016. 09. 반월도 마을식당(리모델링)공사 완료

○ 2016. 11. 박지도 해안가 둘레길 정비공사 완료

○ 2017. 10. 반월도 등산로 정비공사 완료

○ 2017. 12. 지역역량강화(주민대학) 제1기 ~ 제5기 실시 완료

□ 향후계획

○ 2018. 08. 반월도 무인카페, 반월도 마을식당 및 게스트하우스 신축 완료

○ 2018. 09. 반월 다목적센터 조성 발주

사업명

350톤급 여객선 건조

담당자

시설관리사업소 유진우(☎240-4068)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천사대교 개통후 당사도 등 교통단절이 예상되는 우리군 교통여건 변화       예측에 따른 선제적 대응 필요

○ 우리군 관광객 450만명 시대가 예상됨에 따라 버스등을 이용한 단체관광객이       급증할 것으로 전망되어 섬 간 이동권 확보를 위한 대형선박 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 3

○ 위 치 : 신안군 일원

○ 규 모 : 350톤급 차도선(강선) 1척

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000		174	4,807	19
국 비
시 도 비
시군구비	5,000		174	4,807	19
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 350톤급 여객선 건조계획(안)수립             : 2016. 11월

○ 공유재산관리계획심의(군의회 의결)           : 2017. 2월

○ 350톤급 여객선 타당성조사 용역              : 2017. 5월

○ 지방재정투자심사(군)가결                    : 2017. 6월

○ 기본 및 실시설계 완료                       : 2018. 1월

○ 350톤급 여객선 건조 계약의뢰(일반경쟁입찰)  : 2018. 3월

○ 350톤급 여객선 건조 책임감리용역 계약 의뢰  : 2018. 4월

○ 350톤급 여객선 건조 계약 체결               : 2018. 6월

○ 350톤급 여객선 건조 책임감리용역 계약 체결  : 2018. 6월

○ 350톤급 여객선 건조 및 책임감리용역 중지    : 2018. 6월

□ 향후계획

※ 민선7기 사업 재검토로 현재 여객선 건조 중지 중에 있음.

사업명

신안 고둥(패류)전시관 건립

담당자

흑산공항중심권개발단 최건(☎240-8788)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 최다 종류의 고둥류 전시관을 건립하여 가족단위 관광객 유치를

통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2018년

○ 위 치 : 신안군 자은면 백산리 633-58 일원

○ 규 모 : 전시관 1동 975.26㎡, 수장고, 체험교육실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,500		2,150	1,350
국 비	1,000		400	600
시군구비	2,500		1,750	750

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2015. 11. : 제안서 접수(신안군 미래형 관광)

○ 2015. 12. : 고둥 등 물품기탁 협약체결(3천여종, 10만여점)

○ 2016. 08. : 기본계획용역, 투융자심사 완료

○ 2016. 11. : 건축 실시설계 용역 착수

○ 2017. 02. : 실내·외 전시물품 조사

○ 2017. 06. : 경관 및 공공디자인위원회 승인

○ 2017. 07. : 신축 실시설계 완료

○ 2017. 10. : 건축공사 착공

○ 2018. 06. : 전시 제작 설치 우선협상자 선정 완료(조달청)

□ 향후계획

○ 2018. 08. : 전시 실시설계 발주

○ 2018. 11. : 전시 실시설계 완료

○ 2019. 04. : 건축 준공, 전시연출 및 전시보조물 제작 설치 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 신안군에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2017년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 (해당없음)

10-3. 민간투자사업

우리 신안군에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’16년까지 부담액	’17년 부담액	’18년 이후 부담 예정액
BTL		해	당	없	음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2016년까지는 집행액(결산기준), 2017년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 (해당없음)