정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

안전건설방재과

②담당자

(전화번호)

과 장 시설5급 박종원 (240-8460)

담  당 시설6급 박은용 (240-8470)

③정책사업명

지도-임자[임자대교] 도로건설

④선정기준

대규모 예산이 투입는 사업

⑤사업기간

2013년 ~ 2020년

⑥주요내용

□ 추진배경

❍ 국도24호선의 미개통 구간으로 국민관광지인 대광해수욕장이 위치하고 전국 70%를 차지하는 새우젓 주산지인 전장포, 전국 지구력 승마대회 개최지이며, 5만평의 튤립공원이 위치하여 매년 50만명의 관광객이 찾아오고 있을 뿐만 아니라 천일염, 함초, 김, 백합, 송어등 농수축산물의 주 생산지역임

❍ 본 연륙교가 준공될 시 물류비용 절감 등 간접적 수익을 제고하고 낙후 도서지역의 지역간 불균형 해소와 지역경제 활성화를 도모할 것으로 기대

□ 사업개요

❍ 노 선 명 : 국도24호선 (신안~울산)

❍ 위    치 : 신안군 지도읍 점암 ~ 임자면 진리

❍ 사업내용 : L=4.99㎞(교량 2개소 1.92, 접속도로 3.07)

❍ 사 업 비 : 1,676억원

□ 지금까지 추진상황

❍ ‘03. 07.    : 예비타당성조사(B/C=0.80, AHP=0.582)

❍ '06. 12.    : 실시설계완료(‘01. 10. 기본설계 완료)

❍ ‘12. 10. 05 : 수요예측재조사 완료(장래 추정교통량 2.9% 증)

❍ ‘12. 12. 03 : 총사업비 협의

❍ ‘13. 10. 28 : 공사착공

(단위:억원)

사 업 량	사업비	2015 까지		2016 추진		2016 이후
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=4.99km (교량 1.925km)	1,676	L=1.18km (교량 0.456km)	441	L=0.78km (교량 0.780km)	251	L=3.03km (교량 1.20km)	985

□ 향후 추진계획

❍ 현장타설말뚝 및 P/C HOUSE 시공(종합진도 25.7%)