정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	의원급 보건지소 신축사업
② 추진배경	❍ 응급환자 발생 시 신속한 응급처치와 정확한 진단검사 등 시설과 장비를 갖춘 기능확대형 보건지소 신축 추진 ❍ 의료기관이 부족한 섬 지역의 보건의료서비스 질 향상
③ 사업개요	❍ 대 상 : 4개소(가거도, 홍도, 하의, 암태) ❍ 사 업 비 : 10,778백만원(시설비 9,872 / 의료장비 906) ❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년 / 4개년 ❍ 사업내용 : 시설․장비 확충 및 기능보강
④ 사업부서	보건소	⑤ 담당자		행정6급 정성길 보건5급 서정연
⑥ 선정기준	대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간		2015년 ~ 2018년
<그간 주요 추진내용>
❍ 군 공유재산 관리계획 변경승인 (암태,하의)			‘16.1	서정연 보건소장 제갈길명 담당 나훈경 담당자
❍ 문화재 현상변경 허가 취득(홍도)			‘16.3
❍ 도시계획시설 결정 변경(암태)			‘16.6
❍ 설계용역(암태, 홍도)			‘16.8
❍ 의료장비 구입 완료 : 4개소 (심전도계 등 14종)			‘16.12	서정연 보건소장 제갈길명 담당 김영숙 담당자
❍ BF예비인증(암태,하의,가거도,홍도)			‘17.9	서정연 보건소장 정성길 담당 김형하 담당자
❍ 시설공사 착공			‘17.3~’17.10
∙ 하의, 홍도, 암태, 가거도
❍ 마감공사 및 현장정리			‘18.3	서정연 보건소장 정성길 담당 김형하 담당자
❍ 준공 및 개소 예정
∙ 하의 기능확대형 보건지소			‘18.4.11
∙ 암태 기능확대형 보건지소			‘18.5.1
∙ 홍도 기능확대형 보건지소			‘18.5.20
∙ 가거도 기능확대형 보건지소			‘18.6.20