정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가족센터 건립
② 추진배경	가족센터를 건립하여 다문화가족, 미혼모, 한부모, 조손가정, 기타외국인을 아울러, 보다 나은 사회복지 전달체계 및 가족 인프라를 구축하고자 함
③ 사업개요	○ 위 치 : 신안군 압해읍 학교리 588-7 외 6필지 ○ 사업규모 : 대지면적 13,188㎡, 연면적 3,403㎡(지하 1층, 지상 2층) ○ 사업내용 : 가족센터, 공동육아나눔터, 북카페, 어린이 도서관, 상담실, 교육실 등 ○ 사 업 비 : 129억원(국비 50억원, 군비 79억원)
④ 사업부서	교육복지과		⑤ 담당자	복지7급 모현경 행정5급 고민호
⑥ 선정기준	기타		⑦ 사업기간	‘19.2. ~‘22.4.
<그간 주요 추진내용>
○ 신안군 가족센터 건립사업 추진 계획 (교육복지과-10477)		‘19.2.25.	박우량 군수 박경곤 부군수 김지곤 국장 박운기 과장 박향란 담당
○ 지방재정투자심사 완료		‘19.03.05.	박운기 과장 박향란 담당
○ 공공건축사업계획 사전검토 완료		‘19.03.27.	박운기 과장 박향란 담당
○ 기본계획(마스터플랜) 용역 발주		‘19.04.12.	박운기 과장 박향란 담당
○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료		‘19.04.01.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 전라남도 (용역)계약심사 완료		‘19.09.20.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 설계(제안)공모 완료		‘19.11.03.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 기본계획(마스터플랜) 용역 완료		‘19.11.07.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 의뢰		‘19.11.13.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 전라남도 경관 및 공공디자인 심의 협의 완료		‘19.12.10.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 소규모환경영향평가 용역 의뢰	‘19.12.17.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 해양환경영향조사 용역 의뢰	‘20.03.30.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 계약심사 요청[신안군 가족센터 소방 공사] (교육복지과 → 전라남도 회계과)	‘20.06.12.	문영윤 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 신안군 가족센터 건립공사 추진계획 (교육복지과-23511)	‘20.06.15.	박우량 군수 박종열 부군수 장형철 국장 문영윤 과장 송현중 담당/박향란 담당 박재필 주무관
○ 계약심사 요청(신안군 가족센터 전기, 건축, 통신) (교육복지과 → 전라남도 회계과)	‘20.07.06.~ ‘20.07.13.	문영윤 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 신안군 가족센터 건립공사 도계약 심사 완료에 따른 추진계획 (교육복지과-28604)	‘20.07.20.	박우량 군수 박종열 부군수 장형철 국장 문영윤 과장 송현중 담당/박향란 담당 박재필 주무관
○ 신안군가족센터건립공사에 따른 건설 사업관리 및 설계의도 구현 용역 추진계획 (교육복지과-39569)	‘20.11.24.	박우량 군수 박종열 부군수 장형철 국장 문영윤 과장 송현중 담당/박향란 담당 박재필 주무관
○ 건설사업관리용역 사업수행능력(PQ) 추진계획[신안군 가족센터 건립공사] (교육복지과-43310)	‘20.12.03.	박우량 군수 박종열 부군수 장형철 국장 문영윤 과장 송현중 담당/박향란 담당 박재필 주무관
○ 용역 계약 체결 알림(장기 차수) [신안군 가족센터 건립공사 건설사업 관리 용역(1차)]	‘21.02.08.	고민호 과장 박향란 담당 모현경 주무관
○ 준공기한 연장결정 알림[신안군 가족센터 건립 건축공사(총괄 및 1차)]	‘21.03.05.	고민호 과장 박향란 담당 모현경 주무관